작업공정 6월

1.설계 및 인허가

2.지질조사

3.건설사 선정

4.전기,설비목수,징크,석공사 선정

5.승강기선정

6.전기승압

7.수도20증설

8.경계 측량

휴게실

---------------------------------

6월20일 영아부 철거

6월21일 바닥미장

6월22일 찬양대석 공사

6월23일 칸막이공사, 유리공사

6월24일

6월25일

6월26일 회계부 이사

6월27일 나무철거, 음향공사 시작

6월28일

6월29일

6월30일 에어컨 철거

작업공정 7월

1일  에어컨 철거

2일

3일(주일)

4일 지하실 철거 터파기

5일 철근, 목수

6일 레미콘 타설

8일 철근

9일 목수 거푸집

10일(주일)

11일 레미콘 타설

12일

13일 지하층 방수

14일

15일

16일 지하층 메우기, 터파기

17일(주일)

18일 철근작업, 목수 징크 철거

19일 철근작업, 목수 징크 철거

20일 레미콘 타설  기초

21일 경사철거

22일 비계설치

23일 철근작업

24일

25일(주일)

26일 거푸집작업

27일 거푸집작업

28일 거푸집작업  징크작업

29일 철근

30일 레미콘 타설 1층

작업공정 8월

1일 휴가

2일 휴가

3일 휴가

4일 철근작업

5일 거푸집 작업

6일 거푸집 작업
7일(주일)

8일 거푸집 작업

9일 거푸집 작업

10일 거푸집 작업  본당출입문교체

11일 거푸집 작업

12일 철근

13일 콩구리파설  2층

14일

15일 철근

16일 거푸집 작업

17일 거푸집 작업

18일 거푸집 작업

19일 거푸집 작업

20일 거푸집 작업

21일(주일)

22일 철근

23일 레미콘 타설 - 3층

24일 돌주문  화장실작업

25일 철근작업

26일 거푸집 작업

27일 레미콘 타설 4층

28일

29일 전기작업   설비작업

30일 창호작업  통로작업

31일 미장작업  (구 화장실금지)

작업공정 9

1일 타일작업

2일 승강기작업

3일

4일(주일)

5일 천정작업

6일 바닥미장, 화장실칸막이
7일 화장실앞 석공사

8일 유리장착  설비기구

9일

10일 화장실 사용

11일(주일)

12일 돌작업

13일 페인트작업

14일 사무실이전

15일 가스작업

16일

17일

18일(주일)

19일

20일 가드레일 작업

21일 전기기구 작업

22일 조경작업

23일

24일

25일(주일)

26일 마당작업

27일

28일

29일

30일 준공신청